공 사   시 방 서

공사명: ㅇ ㅇ ㅇ 아파트 지하주차장 에폭시 보수공사

ㅇ ㅇ ㅇ 아파트 관리사무소

지하 주차장 에폭시 보수공사 시방서

『 지하주차장 균열보수 및 코팅 공사 』

1. 공 사 명 : ㅇㅇㅇ 아파트 지하주차장 에폭시 보수공사

2. 공사목적 : 지하주차장의 노후화로 인한 주민 불편 사항을 해소하고 건                 축물의 안전과 수명 연장을 목적으로 한다.

3. 공사범위 : 당 아파트 지하주차장 제시면적(도면참조 및 업체 현장실측)

4. 공사기간 : 낙찰자와 협의 조정

5. 공사면적 : 주차장 면적 -  4개소, 1층  (약:           ㎡)

6. 사용자재 및 개요

1) 에폭시 사용자재(KSF 4921) 삼화, 노루, 제비, KCC 등 4대 메이커 이거나 동등     이상의  품질 자재

품 명	범 위	두 께
콘-타이트	탈락균열	표면 동일
하도(프라이머)	전체면	40𝝻이상
에폭시 중도	주행로	평균 1mm
에폭시 상도	전체면	1회 코팅

『R-롤라, H-헤라, J-전용공구』

2)제품배합

가. 주제와 경화제 (2액형)의 배율을 엄수하여 전동 믹서로 충분히 교반한다.

3)제품의 특성

가. 내충격성 및 내마모성의 기계적 물성이 우수하여야 한다.

나. 내산성, 내약품성, 내수성, 방진성이 우수하여야 한다.(방수제는 아님)

다. 건조시간이 (20℃ = 30시간)이내여야 하고 다양한 색상이 가능하여야 한다

4)바닥 균열 보수용 자재 (유.무기 하이브리드 퍼티재 사용)

품 명	범 위	시 공 방 법
콘 - 타이트300	바닥 탈락부분 및 크랙	U-컷팅 후 충진

『R-롤라, H-헤라, J-전용공구』

가. 주제 및 경화제를 충분히 교반하여 시공이 간편하여야 한다.

나. 주재료가 에폭시 계열로 내구력이 우수하여야 하며 침투력이 있어야 한다.

다. 크랙부분 및 패인부분 등 바닥 콘크리트 전반에 사용이 가능 하여야 한다.

라. 가사 시간이 1시간이상이 되어야 하며 건조는 20℃에서 5시간 이내어야 한다.

마. 에폭시와 접착이 좋아야 하며 시공 후 깨어짐과 갈라짐이 없어야 한다.

5)자재입고 및 검수

가. 모든 자재 입고는 현장도착 후 감독관의 검수를 받아 지정장소에 보관하고 현      장대리인은 사용된 빈 용기도 한곳에 보관하고 작업일지에 기록한다.

나. 시방서에서 제시된 자재를 반입치 못하였을 경우 동등이상의 품질을 가진 자재      를  증명 할 수 있는 시험 성적서를 제출하여 감독관의 승인를 거쳐야 사용 할      수 있다.

다. 모든 자재는 밀봉된 상태의 제품으로 개봉되지 않은 봉인된 것이어야 한다.

7. 시공방법

시공순서 : 바탕정리(면처리) >> 균열보수 >> 하도작업 >> 중도작업 >> 상도작업

1)바탕정리

가. 표면의 유분, 수분, 먼지 등의 이물질을 완전히 제거한다.

나. 기존 바닥면의 각재를 샌딩 작업중 연삭작업을 하여 표면을 모두 고속회전 기      기로 면갈이 하여 기존 각재의 들뜬 부분들과 탈락 부분 등은 모두 제거한다.

다. 바닥 크랙 및 콘크리트 탈락 부분에 들어간 이물질과 불순물 등을 철저히 청소      하여 제거한다.

라. 바닥면의 탈락부분을 하이브리드 퍼티로 보수하고 균열부분도 충진하여 평면으      로 면처리 하여 하도 작업 전 바탕면을 충분히 보수하여야 한다.

2)균열보수

가. 2mm 이상으로 심한 균열은 그라인더로 컷팅 후 하이브리드 퍼티재로 충진하여      보수한다.(크랙면 컷팅 후 하도처리 전 하이브리드 퍼티재로 균열보수)

나. 바닥면의 비슷켓 현상 부분은 강도가 나오는 콘크리트 면까지 부분적으로 갈아      내어 청소 후 하이브리드 퍼티재로 충진 보수 하여야 한다.

다. 바닥면의 미세 균열과 2mm 이하 균열은 일반 퍼티재로 보수 한다.

3)하도작업

가. 콘크리트 및 몰탈 소재에 깊이 침투하여 조립자를 고착화 시키고 중도와의 접      착성을 향상시키는 에폭시 수지와 아민 아닥트를 주성분으로 한 상온 경화형       바닥재 하도 도료를 투명한 색상을 도포 한다.

나. 표면 처리가 끝난 바닥면에 희석재(10%~20%)를 혼합하여 40𝝻도장 한다.

다. 누수가 있는 바닥면은 하도 작업전 인젝션(ARC) 주입하고 충분히 건조시킨다.

5℃ ~ 24시간	15℃ ~ 6시간	24℃ ~ 4시간

라. 면처리한 바닥면의 흡수상태에 따라 추가로 1회더 도포하여 양생 할 수 있다.

4)중도작업(출입구 및 커브구간 일부 엠보처리)

가. 주제와 경화제를 지정된 비율로 혼합한 후 전동교반기로 교반한 후 2분 정도       방치 후 통로면 만을 1mm 이상 도장 한다.

나. 바닥면에 시공시 에폭시의 자체 퍼짐성을 이용하여 전용레기로 골고루 균등하      게 도장 하여야 한다.

5℃ ~ 96시간 이상	15℃ ~ 72시간 이상	24℃ ~ 48시간 이상

다. 면처리 된 부분은 2회로 나눠 도포하여 주변과 평면을 이루게 시공한다.

5)상도작업

가. 중도재의 부실한 부분을 다시 한번 보수보강 하여 손질한다.

나. 주제와 경화제를 규정된 비율로 혼합한 후 로울러 또는 스프레이로 주차면 만      을 1회 도장을 한다.

다. 양생된 바닥면에 차선을 시공하여 완공 한다.

8. 에폭시 공사시 준수사항

1)에폭시 공사시 적합한 실내온도는 5℃ ~ 30℃ 사이어야 하며 수분응축을 피하기    위하여 소지면의 표면온도는 이슬점 이상이 되어야 한다.

2)각 도료는 규정된 비율로 혼합하여 재료가 가지고 있는 특성을 살려야 한다.

3)작업자의 안전 및 입주민의 안전에 만전을 기하여 작업하며 시방서를 준수하여     시공 완료를 하여야 한다.

4)준공검사는 공사가 완료되면 작업완료 확인서를 제출하여 검사를 받아야 하며 검    수가 끝나 준공이 완료되면 준공계를 제출하여 당 관리소에서 승인받아야 한다.